등록번호			팀장			처장				시설본부장
등록일자
										전결	11/10
결재일자
공개여부	공개
			협조
				안전관리팀장
				기술혁신팀장
			담 당 자

광안대교 강교도장 보수공사

안전 사고(낙하물) 재발방지대책

※ 시설유지, 재난안전

	【 추진방안 】
❏ 사고개요 ➭ 사고일시: 2021. 11. 08.(월) 12:10경 ➭ 사고위치: 광안대교 하층 MSBR1 (트러스교․현수교 연결구간) ➭ 사고내용: 강풍에 의해 발생된 낙하물이 하층 주행차량에 떨어짐 ❏ 재방방지대책 ➭ 사고발생원인 파악 및 재발방지를 위한 특별안전점검 및 교육 실시 ➭ 낙하물 방지망 등 손상된 공사 시설물 점검 및 보완

안전 사고(낙하물) 재발방지대책

광안대교 강교도장 보수공사 중 비계설치 구간에 강풍에 의한 낙하물 사고가 발생되어 원인 파악 및 재발방지를 위한 대책을 보고드림.

Ⅰ		사고개요

□ 위    치: 광안대교 하층 MSBR1 (트러스교ㆍ현수교 연결구간)

□ 일    시: 2021. 11. 8.(월) 12:10경

□ 내    용: 강풍에 의해 손상된 낙하물방지망에서 비계 연결핀 낙하로

광안대교 하층을 주행중이던 택시 앞유리가 파손된 사고임

※ 사고당시 부산시 강풍주의보 발효 중으로 순간최대풍속 20.1㎧

□ 피해차량: 부산36바74×× (개인택시, 승객 1명)

□ 피해내용: 차량 앞유리 파손 (운전자 및 승객 외상은 없으나 병원진료 희망)

Ⅱ		사고원인 분석

□ 강풍(순간풍속 20.1㎧)에 의한 낙하물방지망 손상

□ 강풍에 의해 낙하물방지망이 롤링하는 과정에서 연결부위 등이 찢어짐 발생

□ 손상된 낙하물방지망 틈으로 비계 연결자재 일부 낙하

※ 손상확인 즉시 긴급 보수작업 시행 완료

낙하물방지망 손상	낙하물로 차량 앞유리 손상

Ⅲ		재발방지대책

□ 재발방지를 위한 특별 안전점검 및 교육 시행

□ 안전관리팀 합동 공사현장 점검 및 교육 실시

▸ 일    시: 2021. 11. 10.(수)

▸ 점 검 자: 안전관리팀 송성훈, 정요한, 교량시설팀 감독자 등 직원

▸ 내    용: 사고현장 조사 및 재발방지 교육 실시

□ 건설재해기술지도 특별현장 점검 및 교육 실시

▸ 일    시: 2021. 11. 11.(목)

▸ 내    용: 시고현장 점검 및 작업자 특별 안전교육 실시

□ 강풍 등 손상 방지를 위해 낙하물방지망 보완ㆍ개선

□ 강풍 등 진동발생에 손상되지 않도록 일정간격으로 횡방향 로프 추가 설치

□ 낙하물방지망 설치폭(2m) 조정을 통해 진동에 의한 손상 방지

□ 낙하물방지망 자체 찢어짐 예방을 위하여 기존보다 견실한 자재로 개선

연결링 옆 찢어짐 발생	진동에 의해 연결링 손상

Ⅳ		금후사항

□ 재발방지를 위한 특별안전점검 요청 ⇒ 안전관리팀

□ 재발방지대책 사항 즉시 반영 요청 ⇒ 도급사

□ 안전관리팀 합동점검 및 건설재해기술지도 시행 알림

□ 낙하물방지망 횡방향 로프 추가 설치 및 상시 점검을 통한 보완.

□ 재발방지대책 알림 ⇒ 부산시.  끝.